특  수  공  시

□ 한마음복지관 건립

□ 판교시립어린이집 건립

□ 공영주차장 건립 (야탑1동,서현2동,산성동,양지동)

□ 사기막골 근린공원 공사

□ 동원동 산업단지 조성

성남시 한마음복지관 건립

장애인의 재활치료, 취업교육 등 사회참여 및 여가활동의 인프라를    구축하여 장애인복지 증진에 기여

□ 사업 개요

○ 위    치 : 분당구 야탑동 170-1, 171번지

○ 사업기간 : 2008. 12 ～ 2011. 4

○ 사 업 량 : 지하2층, 지상3층, 연면적 15,549㎡

○ 주요시설 : 체육시설(수영장, 체육관, 체련단련실), 재활시설, 보육시설

도서열람실, 주간보호실

○ 소요예산 : 31,647백만원

□ 추진 상황

○ 2005. 11. 14. : 장애인복지시설(체육시설)건립 방침결정

○ 2008. 12. 18 : 착공

○ 2009.  5. 27 : 한마음복지관 운영 계획수립

○ 2011.  4. 30 : 공사준공

○ 2011.  8. 18 : 개관

□ 사업효과

○ 취업교육, 재활치료, 물리치료실 등 다양한 프로그램 운영으로 장애인

사회참여활동 확대

○ 체육시설 설치로 재활 및 건강한 심신기능 유지를 통한 장애인복지 증진

판교 시립어린이집 건립

새롭게 조성된 판교택지개발지구 내 입주민에 대한 보육아동 수요를 사전에 대비할 수 있는 보육시설을 건립하여 주민 불편을 해소하고 질높은 보육서비스를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 성남시 분당구 판교동 632번지

○ 사 업 량

• 대지면적 : 2,933.4㎡

• 건축면적 : 861.02㎡(건폐율 : 29.35%)

• 연 면 적 : 2,952.43㎡(용적율 : 76.04%)

• 규    모 : 지하1층, 지상3층

○ 사업기간 : 2007. 10 ~ 2011. 3

○ 총사업비 : 12,631백만원

□ 건물현황

○ 주 용 도 : 노유자시설(아동관련시설〉영유아보육시설〉어린이집)

• 지하1층 : 전기․기계실, 주차장

• 지상1층 : 영․유아보육실, 사무실, 양호실

• 지상2층 : 유아보육실, 조리실, 교사실

• 지상3층 : 교재교구실, 유아보육실, 강당

○ 주차대수 : 15대(장애인용 1대포함) - 법정 13대

○ 조경면적 : 963.66㎡(대지면적의 30.79%) - 법정 대지면적의 15%이상

○ 보육정원 : 234명(장애아 포함)

구 분	계	소계	시간 연장	영아반(1층 7실)			유아반(2~3층 10실)
				0세반	1세반	2세반	3세반	4세반	5세반
아동수 (장애아)	234	223 (11)	5 (0)	12 (0)	15 (0)	35 (0)	45 (5)	60 (3)	51 (3)
보육교사 (특수교사)	26	22 (4)	1	12/3=4	15/5=3	35/7=5	45/15=3 (5/3=2)	60/20=3 (3/3=1)	60/20=3 (3/3=1)

□ 추진 상황

○ 2007. 10. 22 : 판교택지개발지구내 보육시설 건립계획 수립

○ 2008. 07. 03 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2008. 12. 24 : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2009.  3.  5 : 공사착공

○ 2011.  3. 18 : 공사준공

○ 2011.  3. 21 : 개원

□ 사업효과

○ 새롭게 조성된 판교택지개발지구 입주민의 보육수요 사전 대비

○ 영아, 장애아 등 특수보육에 대한 수혜 제공으로 모든 아동에 대한        동등한 보육 기회제공

○ 저소득층의 아동 및 맞벌이 가정의 아동을 보육함으로써 보호자의        경제적, 사회적 활동 지원

□ 어린이집 전경

공 영 주 차 장 건 립

밀집된 주택가지역의 심각한 주차난을 해소하고 이면도로 및 간선 도로변 불법 주․정차를 예방하여 재난사고 사전예방에 철저를 기하며, 교통문화 개선으로 시민의 삶의 질 향상에 기여하고자함.

□ 사업 개요

【야탑1동 385번지 공영주차장건립】

○ 공사개요

ㆍ부 지 면 적 : 4,064.62㎡     ㆍ건축 연면적 : 8,521.83㎡

ㆍ규모 및 구조 : 지하3층, 철근콘크리트조

ㆍ주 차 면 수 : 211면

○ 공사기간 : 2009. 05. 14 ∼ 2011. 12. 19

○ 총사업비 : 13,305백만원

【서현2동332번지 공영주차장건립】

○ 공사개요

ㆍ부 지 면 적 : 4,487.50㎡

ㆍ건축 연면적 : 7,501.51㎡

ㆍ규모 및 구조 : 지하2층, 철근콘크리트조

ㆍ주 차 면 수 : 212면

○ 공사기간 : 2009. 06. 26 ∼ 2012. 01. 23

○ 총사업비 : 12,240백만원

【산성동 6번지 환승주차장건립】

○ 공사개요

ㆍ부 지 면 적 : 5,618.2㎡      ㆍ건축 연면적 : 9,361.5㎡

ㆍ규모 및 구조 : 지하4층/지상2층, 철근콘크리트조

ㆍ주 차 면 수 : 229면

○ 공사기간 : 2009. 04. 30 ∼ 2012. 12. 31

○ 총사업비 : 20,411백만원(LH공사와 50:50 분담, 토지ㆍ설계비 제외)

【양지동 865번지 공영주차장건립】

○ 공사개요

ㆍ부 지 면 적 : 1,790.2㎡     ㆍ건축 연면적 : 3,747.5㎡

ㆍ규모 및 구조 : 지하2층/지상2층, 철근콘크리트조

ㆍ주 차 면 수 : 111면

○ 공사기간 : 2011. 09. ∼ 2012. 09.

□ 추진상황 및 향후계획

【야탑1동 385번지 공영주차장건립】

○ 2007. 04. 16  ∼ 2009. 02. 24 : 설계용역(229,900천원)

○ 2009. 03. 26 : 도시계획시설(노외주차장) 실시계획 인가

○ 2009. 05. 19 : 건축협의(시 건축과)

○ 2009. 05. 12 : 건립공사 계약 및 착공

ㆍ공 정 율 : 76.0%(2011. 8. 현재)

○ 2011. 12. 19 : 건립공사 준공예정

【서현2동332번지 공영주차장건립】

○ 2006. 07. 05 ∼ 2008. 02. 28 : 설계용역(128,134천원)

○ 2009. 06. 02 : 공원조성계획 변경 결정 고시

○ 2009. 06. 29 : 건립공사 계약 및 착공

ㆍ공 정 율 : 65.0%(2011. 8. 현재)

○ 2012. 04. 03 : 건립공사 준공예정

【산성동 6번지 환승주차장건립】

○ 2005. 05. 02 ∼ 2008. 02. 28 : 설계용역(165,107천원)

○ 2008. 10. 31 : 도시계획시설(주차장) 사업 실시계획 인가

○ 2009. 03. 10 : 건축협의(시 건축과)

○ 2009. 04. 24 : 건립공사 계약 및 착공

ㆍ공 정 율 : 25.0%(2011. 8. 현재)

○ 2009. 09. 04 : LH공사와 사업비 분담 협약체결(50:50)

○ 2012. 12. 31 : 건립공사 준공예정

【양지동 865번지 공영주차장건립】

○ 2009. 03. 02 ∼ 2011. 02. 21 : 설계용역(70,000천원)

○ 2010. 03. 10 : 토지 및 건물 매입 1필지 매입

○ 2010. 11. 29 : 건축위원회 심의

○ 2011. 02. 24 : 성남시 설계자문위원회 설계자문

○ 2011. 04. 13 : 주민설명회 개최(양지동 주민센터 회의실)

○ 2011. 09.    : 편입 토지매입 및 건축허가 협의

○ 2011. 10.    : 건립공사 계약 및 착공

○ 2012. 12.    : 건립공사 준공 예정

□ 사업효과

○ 주택 밀집지역의 심각한 주차난 해소

○ 간선도로 및 이면도로 불법 주․정차 예방으로 교통소통에 기여

【야탑1동 385번지 공영주차장】

【서현2동 332번지 공영주차장】

【산성동 6번지 환승주차장】

【양지동 865번지 주차장】

사기막골 근린공원 조성사업

남한산성 주변과 인접한 사기막골 유원지내 불량시설 철거지역을 도시근린공원으로 결정, 조성하여 자연환경을 복원하고 지역주민의 쾌적한 휴식공간으로 제공하여 삶의 질 향상에 기여

□ 사업 개요

○ 위    치 : 중원구 상대원동 28번지 일원

○ 사업기간 : 2008. 11. 3 ～ 2010. 7. 27

○ 면    적 : 21,620㎡ (6,540평)

○ 사업내용 : 전통문화체험관, 전시실, 산책로 등

○ 소요예산 : 19,794백만원

□ 추진 상황

○ 2006.  3. 13 : 도시관리계획(공원) 결정

○ 2006.  6. 01 : 공원조성계획 수립 고시

○ 2006.  8. 08 : 실시계획인가 고시

○ 2007. 12. 14 : 토지보상(완료 20필지)

○ 2008. 11. 03 : 공사착공

○ 2010. 07. 27 : 공사준공

○ 2010. 08. 27 : 성남도시계획시설사업 완료 공고

□ 사업효과

○ 불량시설 철거지역을 자연친화적이고 쾌적한 도심공원으로 조성

○ 부족한 공원시설 확충으로 주민의 생활환경을 개선하여 삶의 질 향상

동원동 일반산업단지 조성사업

신흥동 제1공단 대체부지로 추진중인 동원동 일반산업단지내에 우리시 3대 전략 산업인 IT-Soc, Medi-Bio 등을 유치하여 산업발전 및 고용을 촉진하고 지역경제 활성화에 기여

□ 사업 개요

○ 위       치 : 성남시 분당구 동원동 142번지 일원

○ 사 업 면 적 : 69,885㎡(21,140평)

○ 사 업 기 간 : 2007년 ~ 2013년

○ 소 요 예 산 : 72,759백만원(공사비 : 4,434, 보상비 : 64,973 , 법적부담금 : 2,974, 용역비 : 378)

(단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별
	국비	도비	시비	기타	기투자 (2009년까지)	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년 이 후
72,759	-	-	43,659	29,100	13,352		59,407	-	-	-

□ 추진 상황

○ 2007.  7. 19 : 산업단지지정 및 개발계획수립 용역 착수

○ 2008.  3. 28 ~ 4. 10 : 개발계획(안) 및 사전환경성 검토 초안 주민공람실시

○ 2009.  3. 25 : 사전환경성검토 협의완료(한강유역환경청→성남시)

○ 2009.  4. 13 : 일반산업단지 지정 및 지형도면 고시

○ 2009.  8.  7 : 일반산업단지 지정 변경 및 지형도면 고시

○ 2009. 11.  25 : 동원동 일반산업단지개발 실시계획 승인 협의 중

○ 2011.  1.  10 : 일반산업단지 지정 변경 고시

□ 향후계획

○ 2012.  3 : 동원동 일반산업단지 지장물 철거 및 가설울타리 설치

○ 2012.  4 : 동원동 일반산업단지 실시계획 인가

○ 2012.  5 : 공사 착공

○ 2013.  8 : 준공

□ 사업 효과

○ 성남시 3대 전략사업인 IT-SoC, Medi-bio 분야의 첨단산업 클러스터 구축

○ 분당벤처지구~판교테크노밸리 등과 연계한 첨단산업의 개발축 조성

○ 제조업 기반의 인프라구축에 따른 성남시 자족성 향상

□ 조 감 도

【동원동 일반산업단지 조감도】