특 수 공 시

□ 12년도 특수공시 선정사업

부 서 명	사 업 명		비 고
보건위생과	성남시 의료원 설립
장애인복지과	한마음 복지관 건립
가족여성과	육아지원센터 설치 및 운영 (성남시 육아지원 아이사랑놀이터)
	시립보육시설 확충
교통기획과	공영주차장 건립
		야탑1동 385번지 공영주차장 건립
		서현2동 332번지 공영주차장 건립
		산성동 6번지 환승주차장 건립
		양지동 865번지 공영주차장 건립

성남시 의료원 설립

수정․중원구 지역의 종합병원 이전 및 폐업에 따른 지역주민의

의료불편을 해소하고 양질의 의료서비스를 제공하기 위함

□ 사업 개요

○ 위    치 : 성남시 수정구 수정로 170번지길10(구 시청사)

○ 사업기간 : 2006. 3 ～ 2017. 4

○ 규    모 : 450병상(연면적 81,510㎡, 지하4층 / 지상11층)

○ 부지면적 : 24,829.5㎡

○ 소요예산                                        (단위 : 백만원)

총사업비	재 원 별				연 도 별
	국비	도비	시비	기타	2011까지 투자	2012년	2013년이후
193,134			193,134		4,699	10,095	178,340

□ 추진상황

○ 2006.  3. 31 :『성남시 의료원 설립 및 운영에 관한 조례』공포

○ 2007. 11. 26 : 성남시 의료원 설립 기본계획 수립

○ 2008.  2 ∼ 2011. 8 : 행정절차 추진(공사방법, 투자심사, 공유재산 등)

○ 2012.  2. 20 : 의료원조례 제정공포(의원발의)

○ 2011 9.23 ~ 2012. 2. 23 : 구) 시청사 철거공사

○ 2012.  6.  5 : 의료원 설립 추진위원회 및 분과위원회 구성

□ 향후계획

○ 2012. 9월 : 본 공사 발주 의뢰

○ 2013. 4월 : 공사착공

○ 2017.  1월 : 공사 준공

○ 2017.  4월 : 개원

한마음복지관 건립

장애인의 재활치료, 취업교육 등 사회참여 및 여가활동의 인프라를

구축하여 장애인복지 증진에 기여

□ 사업 개요

○ 위    치 : 분당구 야탑동 170-1, 171번지

○ 사업기간 : 2008. 12. ～ 2011. 4. 30

○ 사 업 량 : 지하2층, 지상3층, 연면적 15,549.93㎡

○ 소요예산 : 31,647백만원(국비 8백만원, 도비 119백만원, 시비 31,290백만원)

□ 추진 상황

○ 2008. 12. 19 : 기공식

○ 2009.  9. 11 : 장애인복지시설 설치 및 운영조례 일부개정

○ 2011.  4. 11 : 한마음복지관 민간위탁 협약(분당우리복지재단)

○ 2011.  4. 30 : 건축공사 준공

○ 2011.  8. 13 : 개관

□ 건물현황(주요용도)

층 별	주 요 용 도	면적(㎡)
계		15,549.93
지하2층	□주차장(기계실, 전기실)	4,611.42
지하1층	□장애인 체육시설(수영장,탁구장,당구장,체력단련실) 및 목욕탕 □식당, 매점, 이․미용실, 열린카페	3,562.03
지상1층	□장애인 주간보호실, 방과후 교실운영, 장애아 보육시설 □장애인점자 도서관(열람, 청취, 정보검색 등) □장애인 차별금지 지원센터	2,501.65
지상2층	□다목적 체육관, 평생학습관, 대강당 □장애인 의료 재활시설(언어치료실, 감각통합치료실 등)	3,086.77
지상3층	□장애인 직업재활시설(직업적응훈련실, 직업재활 프로그램실 등) □종합사무실 및 회의실, 자원봉사자실	1,788.06

육아지원센터 설치 및 운영

영유아 보육의 공적기능 확대 요구 및 기대가 높아지고 있는 상황에서 영유아에 대한 다양한 육아지원과 복지서비스를 제공하고자 함

□ 사업 개요

구 별	개관	규모(㎡)	2012운영비(천원)	소 재 지
시 청Ⅰ	2011. 8. 4	151.7	224,852	성남시청 9층
시 청Ⅱ	2012. 6.12	170	224,852
수 정	2011. 11.4	196.5	201,498	수정구 단대어린이집 3층
분 당	2012. 3.27	285	340,000	분당구 판교제2어린이집 3층

○ 현    황

○ 기    능

∙ 장난감도서관 : 아동 발달에 맞는 영역별 장난감과 도서 이용 및 대여

∙ 상담 및 검사 : 아동발달, 양육상담 및 영유아 발달검사 지원

∙ 부모와 영유아가 함께하는 독서, 휴식공간제공

∙ 육아정보 및 출산․육아․예방접종 등 건강정보 공유

□ 추진상황

○ 2011.  8.  4 : 시청 아이사랑놀이터 개관

○ 2011. 11.  4 : 수정 아이사랑놀이터 개관

○ 2011. 12. 14 : 중원 아이사랑놀이터 설계용역 착수

○ 2012.  3. 27 : 분당 아이사랑놀이터 개관

○ 2012.  6. 12 : 시청 아이사랑놀이터(Ⅱ) 개관

□ 향후계획

○ 중원 아이사랑놀이터 준공예정 : 2013. 9월(중앙동 소재)

시립보육시설 확충

여성의 경제활동 증가로 양질의 보육서비스에 대한 시민들의 기대와 출산 장려정책에 부응코자 어린이집을 지속적으로 확충하여 영유아의 건전한 육성을 통해 보호자의 사회·경제적 활동을 지원하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 분당구 판교동 632번지 등 13개소

○ 사 업 량 : 12개소(중원구 5개소, 분당구 7개소)

□ 추진상황

(단위 : 백만원)

구분	명칭	위 치	규모 (㎡)	총사업비	정원(명)	사업시기	추진상황
계	12개소			27,155	1,049		완료4개소, 추진중 8개소
신축 ⌢ 단독 ⌣	판교동	판교동632	2,952	12,631	233	2007.10〜 2011. 3	▪2009. 3월 : 공사착공 ▪2011. 3.21 : 개 원
	야탑동	야탑동195	2,016	4,479	140	2009. 7∼ 2014. 4	▪기업투자사업 협의중 ▪2014. 4월 : 개원예정
	중앙동	중3재개발구역 A6	2,250	7,553	130	2010. 1〜 2013. 9	▪2011.12월 : 설계용역 착수 ▪2013. 9월 : 개원예정
	판교제2	판교동 553 (판교홍보관)	1,435	1,952	141	2011. 6~ 2012. 3	▪2011. 6월 : 계획수립 ▪2012. 3.12 : 개 원
신축 ⌢ 복합 ⌣	장애아 전담	야탑동170,171 (한마음복지관 내)	649.26	-	30	2008.10〜 2011. 9	▪2008.12월 : 공사착공 ▪2011. 9.1 : 개원
	여수동	여수보금자리주택 I2 (어린이종합지원센터내)	750	-	100	2012. 2~ 2014.	▪2014. 2월 : 공사준공 예정 ▪2014. 3월 : 개원예정
	도촌동	도촌동647 (도촌종합사회복지관내)	452.46	-	78	2009. 1〜 2014.	▪2010. 2월 : 설계용역 준공 ▪2014. 2월 :준공예정
	보통골	상대원동378-4	97	-	23	2009. 1~ 2012. 9	▪2012.. 9월 : 공사준공 및 개원
무상임대	봇들제2	삼평동728	144.51	90	34	2011년	▪2010. 4월 : 협약 체결 ▪2011. 7.1 : 개원
	A24-1BL	백현동553	246.23	90	57	2012~ 2013년	▪2010. 4월 : 협약 체결 ▪개원시기 : 미정
	A25-1BL	백현동546	194.75	90	45	2012~ 2013년	▪2010. 4월 : 협약 체결 ▪개원시기 : 미정
	산업단지	상대원동 517-14	165	270	38	2012~ 2013년	▪2012. 4월 : 설치계획 수립 ▪2013. 1월 : 공사준공 및 개원

공 영 주 차 장 건 립

밀집된 주택가지역의 심각한 주차난을 해소하고 이면도로 및 간선 도로변 불법 주․정차를 예방하여 재난사고 사전예방에 철저를 기하며, 교통문화 개선으로 시민의 삶의 질 향상에 기여하고자함.

【야탑1동 385번지 공영주차장건립】

○ 공사개요

ㆍ부 지 면 적 : 4,064.62㎡     ㆍ건축 연면적 : 8,521.83㎡

ㆍ규모 및 구조 : 지하3층, 철근콘크리트조

ㆍ주 차 면 수 : 211면

○ 공사기간 : 2009. 05. 14 ∼ 2012. 1. 26

○ 총사업비 : 13,305백만원

○ 2007. 04. 16  ∼ 2009. 02. 24 : 설계용역(229,900천원)

○ 2009. 03. 26 : 도시계획시설(노외주차장) 실시계획 인가

○ 2009. 05. 19 : 건축협의

○ 2009. 05. 12 : 건립공사 계약 및 착공

○ 2012. 01. 26 : 공사준공

【서현2동332번지 공영주차장건립】

○ 공사개요

ㆍ부 지 면 적 : 4,487.50㎡      ㆍ건축 연면적 : 7,501.51㎡

ㆍ규모 및 구조 : 지하2층, 철근콘크리트조

ㆍ주 차 면 수 : 203면

○ 공사기간 : 2009. 06. ∼ 2012. 07.

○ 총사업비 : 12,240백만원

○ 2006. 07. 05 ∼ 2008. 02. 28 : 설계용역(128,134천원)

○ 2009. 06. 02 : 공원조성계획 변경 결정 고시

○ 2009. 06. 29 : 건립공사 계약 및 착공(공정율 99.2%, 2012. 8월 현재)

【산성동 6번지 환승주차장건립】

○ 공사개요

ㆍ부 지 면 적 : 5,618.2㎡      ㆍ건축 연면적 : 9,361.5㎡

ㆍ규모 및 구조 : 지하4층/지상2층, 철근콘크리트조

ㆍ주 차 면 수 : 229면

○ 공사기간 : 2009. 4.  ∼ 2013. 3.

○ 총사업비 : 16,452백만원

○ 2005. 05. 02 ∼ 2008. 02. 28 : 설계용역

○ 2008. 10. 31 : 도시계획시설(주차장) 사업 실시계획 인가

○ 2009. 03. 10 : 건축협의

○ 2009. 04. 24 : 건립공사 계약 및 착공(공정율 63.5%, 2012년 8월 현재)

【양지동 865번지 공영주차장건립】

○ 공사개요

ㆍ부 지 면 적 : 1,790.2㎡     ㆍ건축 연면적 : 3,747.5㎡

ㆍ규모 및 구조 : 지하2층/지상2층, 철근콘크리트조

ㆍ주 차 면 수 : 111면

○ 공사기간 : 2011. 12. ∼ 2013. 02

○ 총사업비 : 5,290백만원

○ 2009. 03. 02 ∼ 2011. 02. 21 : 설계용역

○ 2010. 11. 29 : 건축위원회 심의

○ 2011. 02. 24 : 성남시 설계자문위원회 설계자문

○ 2011. 04. 13 : 주민설명회 개최

○ 2011. 12. 14 : 착공(공정율 48%, 2012. 8월 현재)