정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

사업부서	재정경제국 시장현대화과 (2018 – 28)	담당자 (전화번호)	심재호 (729-8972)
정책사업명	수정커뮤니센터 건립
선정기준	10억 이상의 예산이 투입되는 건설사업	사업기간	2011 ~ 2020
주요내용	○ 사업목적 • 수정로 상권 및 인근 주거지역의 주차장 부족문제를 해소하고 상권활성화를 도모하기 위하여 공영주차장과 다양한 주민편의시설을 결합하여 건립하고자 함 ○ 개 요 • 위 치 : 수정구 수진1동 587 등 6필지 • 대지면적 : 4,707.70㎡(연면적 : 27,656.38㎡) • 사 업 량 : 지하1, 지상7(공영주차장 : 635대) • 주요시설(층별) ∙ 지하1층 상가 ∙ 지상1층 북카페 ∙ 지상2층 업무시설, 주차장(49대) ∙ 지상3층 ~ 지상6층 주차장(506대) ∙ 지상7층 게이트볼장, 주차장(80대) ※ 현재 실시 중인 설계용역 결과에 따라 사업량 일부변경 가능 • 예 산 액 : 57,622백만원 ○ 그간의 추진상황 • 2011. 10. 28. : 연구용역 준공 • 2012. 10. 8. : 수정커뮤니티센터 건립 기본계획 수립 • 2013. 5. 3. : 지방재정 투･융자 심의(적정) • 2013. 11. 29. : 공유재산관리계획 심의(원안가결) • 2014. 12. 29. : 설계용역 착수 • 2015. 12. 7. : 임시주차장 운영(191대) • 2015. 12. 15. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역 준공 • 2016. 5. 2. : 도시계획시설(주차장) 실시계획 인가 • 2016. 9. 6. : 건축허가 승인 • 2016. 12. 22. : 기본 및 실시설계용역 준공 • 2017. 8. 28 : 2017년 하반기 지역현안수요 특별교부세 사업신청 • 2017. 9. 28 : 특별교부세 확보(1,500백만원) • 2018. 8. 1 : 건립공사 착공 ○ 추진계획 • 2018. 8. ∼ 2020. 10월 : 공사 및 준공