정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

사업부서	복지보건국 사회복지과 (2018 – 03)	담당자 (전화번호)	허지윤 (729-2832)
정책사업명	위례어울림종합사회복지관 건립공사
선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	사업기간	2016. 4~ 2023. 11
주요내용	○ 추진배경 • 위례택지개발지구내 복정동 및 위례동지역 주민들의 삶의 질 향상 및 복지수요 충족을 위한 종합사회복지관을 건립하여 지역주민의 복지 증진에 기여하고자 건립 ○ 추진기간 : 2016. 4. ~ 2023. 11. ○ 총사업비 : 30,300,000천원 ○ 주요내용 - 위 치 : 수정구 위례지구 복지5부지 - 사 업 량 : 지하 2층, 지상5층 (부지면적 3,032.3㎡) ○ 추진상황 • 2016. 04. : 건립계획 검토 방침 보고 • 2016. 09. : 공유재산 관리계획 성남시의회 승인 • 2017. 11. : 중기지방재정계획 심의 완료 • 2018. 7. : 경기도 투․융자 심사 승인 ○ 향후계획 • 2018. 12. : 부지매입 개시 (3년 분할 납부) • 2019. 2. : 건립관련 주민 의견수렴 • 2019. 3. : 기본 및 실시설계 착공 • 2020. 3. : 기본 및 실시설계 준공 • 2020. 5. : 공사 착공 • 2022. 5. : 공사 준공 • 2022. 5. ~ 2023. 11. : 프로그램실 인테리어 공사 및 개관 ○ 기대효과 • 지역특성에 맞는 전문적인 복지서비스 제공으로 지역주민의 복지증진 • 다양한 복지프로그램 제공으로 구시가지 복지수준 향상