정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

① 사업부서	환경보건국 공공의료정책과 (2018 - 40)	② 담당자 (전화번호)	노정진 (729-3645)
③ 정책사업명	성남시의료원 건립공사
④ 선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤ 사업기간	2013.11.∼2019. 1.
⑥ 주요내용	□ 사업목적 ○ 수정⋅중원 지역 주민의 의료불편을 해소하고 양질의 의료 서비스를 제공하고자 함 □ 사업개요 ○ 위 치 : 성남시 수정구 수정로 171번길 10 ○ 부지면적 : 24,711.3㎡ ○ 연 면 적 : 85,684.16㎡ (지상4층, 지상10층) ○ 병원규모 : 509병상, 24개 진료과 ○ 사 업 비 : 169,134백만원 □ 추진상황 ○ 2013. 11. 14. : 공사 착공 ○ 2014. 10. 22. : 울트라건설(주) 기업회생절차 개시결정 ○ 2014. 11. 18. : 울트라건설(주) 공사 포기 ○ 2014. 12. 5. : 삼환기업(주) 주관사 결정 ○ 2017. 10. 12. : 삼환기업(주) 기업회생절차 개시결정(공사중단) ○ 2017. 12. 11. : 삼환기업(주) 공사 이행 결정 ○ 2018. 5. 24. : 삼환기업(주) 기업회생계획안 강제인가(서울회생법원) ○ 2018. 6. 25. : 삼환기업(주) 기업회생절차 종결(SM그룹 인수합병) ○ 2018. 12. 현재 공정율 : 90% □ 향후계획 ○ 2019. 1. 14. : 공사 준공(예정)