정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

① 사업부서	교통도로국 도로과 (2018 - 48)	② 담당자 (전화번호)	박성만 (729-3603)
③ 정책사업명	지방도 338호선(이배재) 확장공사
④ 선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 건설사업	⑤ 사업기간	2006.4 ~ 2019. 9
⑥ 주요내용	○ 추진배경 • 광주와 성남을 연결하는 지방도 확장 사업으로 지역간 균형발전을 도모하고, 성남 산업단지의 물류 수송로를 확보하여 지역경제 활성화 ○ 추진기간 : 2006. 4 ~ 2019. 9 ○ 총사업비 : 66,442백만원(성남시 23,996백만원) 【경기도 33,221(50%), 성남시 23,996(26%), 광주시 9,225(14%)】 ○ 주요내용 • 위 치 : 광주시 탄벌동 ~ 성남시 상대원동 • 사업량 : 도로확장 L=2.24km, B=19m(4차로)【성남 1.43km, 광주 0.81km】 ○ 추진현황 • 2002. 11. 15. : 도로 확․포장 사업건의(광주시 → 성남시) • 2006. 04. 06. : 실시설계용역 착수(광주시) • 2006. 07. 24. : 사업시행협약 체결(성남시 ↔ 광주시) • 2012. 05. 23. : 사전환경성검토 협의 완료(노선확정) • 2012. 06. 13. : 공사착공에 따른 사업비 확보 요청(광주시 → 성남시) • 2013. 06. 21. : 최종 실시설계안 검토 협의(광주시 → 성남시) • 2013. 07. 04. : 환경영향평가 협의 완료(한강유역환경청) • 2013. 12. 30. : 공사 착공 • 2016. 09. 22 : 공사 일시 중지 • 2017. 03. 07. : 재착공 • 2017. 12. 11. : 공정율 80% ○ 향후 추진계획 • 2019. 09. 03. : 공사 준공