정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2018 – 54

담당자

(연락처)

도시개발사업단/도시재생정책과

정환국(729-4452)

정 책 명

행복공동체 활성화를 위한 단대동 맞춤형 정비사업(완료)

사업개요

○ 추진배경

• 전면철거방식의 정비사업에서 커뮤니티를 보존하는 방향으로 주거재생 패러다임 변화

• 단대구역 및 1공단 중간에 위치하여 별도 개발사업 추진이 지난한 지역을 도시계획적 맥락의 연속성 측면에서 시범지구 지정

• 국토교통부, 경기도와 함께 경기도 최초 시범사업 지역으로 성남형 주민중심의 맞춤형 정비사업 추진을 통하여 주거환경 개선 등 주민 삶의 질 향상 도모

○ 추진기간 : 2013. 2. ~ 2018. 9.

○ 총사업비 : 50억원(국비 25억, 도비 7.5억, 시비 17.5억)

○ 주요내용

• 정비기반시설 : Pocket Park, 공용주차장 확충, 도로패턴포장 등

• 공동이용시설 : 경로당 확충 및 개량, 공부방, 어린이집, 마을회관 조성

• 기        타 : 방범용 CCTV 및 CPTED 도입, 산책로조성, 담장허물기,

그린파킹/그린존, 주택 개‧보수

• 국정과제 연계 : 소규모 행복주택 및 행복주택관리소 도입 등

추진경과 및

사업 관련자

□ 사업관련자 현황

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
단장	진광용	시설4	13.02.05~13.05.01	사업총괄
단장	곽현성	시설4	13.05.02~14.08.03	사업총괄
단장	곽정근	시설4	14.08.04~14.11.	사업총괄
단장	김낙중	시설4	14.12.~15.11.01	사업총괄
단장	이근배	시설4	15.11.02~16.12.31	사업총괄
단장	김낙중	시설4	17.01.01~현 재	사업총괄
과장	김형석	시설5	13.02.05~13.10.31	업무총괄
과장	최창규	시설5	13.11.01~14.11.02	업무총괄
과장	김용훈	시설5	14.11.03~15.04.30	업무총괄
과장	김옥상	시설5	15.05.01~16.12.31	업무총괄
과장	연규옹	시설5	17.01.01~17.07.09	업무총괄
과장	우이섭	시설5	17.07.10~18.06.30	업무총괄
과장	박경우	시설5	18.07.30~현 재	업무총괄
팀장	박채운	시설6	13.02.05~현 재	맞춤형 정비사업 총괄
담당	전영재	시설7	13.02.05~13.04.30	맞춤형 정비계획 수립
담당	김재현	시설8	13.05.01~14.03.09	맞춤형 정비계획 수립
담당	전영재	시설7	14.03.10~17.01.31	맞춤형 정비계획 수립
담당	안진섭	시설8	17.02.01~17.12.31	맞춤형 정비사업 추진
팀장	임근순	시설6	17.01.01~현 재	맞춤형정비사업 공사총괄
담당	정환국	시설7	17.01.01~현 재	토목분야 공사 추진
담당	김대현	공업7	17.01.01~17.12.31	전기∙통신분야 공사 추진
담당	한재훈	공업8	18.01.01~현 재	전기∙통신분야 공사 추진

□ 추진경과

○ 2013. 02. 05 ~ 21 : 주민설명회 개최(1~4차)

○ 2013. 02. 25 : 상호협력 협약식 개최(성남시 등 6개 단체)

○ 2013. 02. 28 : 사업계획서 제출(성남시→경기도)

○ 2013. 04. 17 : 경기도 맞춤형 정비사업 공모 선정

○ 2013. 07. 23 : 과업 추진계획 관련 주민협의체 설명회 및 의견수렴

○ 2013. 12. 30 : 용역 계약 및 착수

○ 2014. 06. 25 : 국토교통부 도시활력증진지역 개발사업 공모 선정

○ 2014. 12. 29 : 소규모 행복주택 업무협약(성남시, LH)

○ 2015. 04. 08 : 경기도 맞춤형복지마을(주택개보수지원사업) 선정

○ 2015. 06. 17 : 주택개보수지원사업 업무협약(성남시, 경기도시공사)

○ 2015. 06. 22 : 정비계획 수립 고시

○ 2015. 08. 03 : 실시설계 용역 착수

○ 2015. 10. 19 : 실시설계(안) 주민설명회

○ 2015. 12. 24 : 소규모 행복주택 사업승인(국토교통부)

○ 2016. 06. 17 : 지중화공사 이행 협약체결(성남시 ↔ 한전)

○ 2016. 07. 14 : 실시설계(안) 공공디자인위원회 심의 (조건부 의결)

○ 2016. 08. 04 : 단대동 지중화사업 실시설계 착공(한전)

○ 2016. 11. 28 : 사업시행계획서(안) 주민공람(~12/12일까지 15일간)

○ 2016. 12. 15 : 실시설계 용역 준공

○ 2016. 12. 27 : 단대동 맞춤형정비사업 토목분야 공사 착공

○ 2017. 01. 23 : 사업시행계획서 작성 고시

○ 2017. 02. 12 : 통신선로 지중화공사 이행협약 체결(SKT등 4개사)

○ 2017. 05. 12 : 통신선로 지중화공사 이행협약 체결(KT)

○ 2017. 11. 20 : 행복주택 입주

○ 2018.  9. 17 : 단대동 맞춤형정비사업 토목분야 공사 준공