정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2018 - 61

담당부서

작성자

(평생학습원 / 도서관지원과)

(이미정/ 729-4672)

정 책 명

서현도서관 건립

사업개요

○ 위    치 : 분당구 서현동 234번지

○ 사업기간 : 2009. 1. ∼ 2018. 9.

○ 사업규모 : 지하3층/지상4층(부지 4,222㎡, 연면적 12,559.41㎡)

○ 소요예산 : 30,532백만원

(공사비 26,126 / 설계비 787 / 감리비 1,700 / 시설부대비 등 1,919)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 행정7급  남경민

- 최종 결재자 : 성남시장 이대엽

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
소장	정석모	4급	‘09.1.15～10.3.7	정보문화센터 총괄
〃	이정도	4급	‘10.3.8～10.9.28
〃	오흥석	4급	‘11.11.1～12.5.1
〃	오창선	4급	‘12.5.2～12.12.31
〃	윤기천	4급	‘13.5.2～13.10.31
〃	이정하	4급	‘13.11.1～‘15.11.1현재
〃	박재양	4급	‘15.11.2～16.5.1
〃	박창훈	4급	‘16.5.2~16.10.31
〃	임승민	4급	‘16.11.1~17.12.31
〃	이정도	4급	‘18.1.1 ~18.6.30
〃	이균택	4급	‘18.7.30 ~ 현재
과장	임종일	5급	‘09.1.15～09.10.4	중앙도서관 총괄
〃	손돌래	5급	‘09.10.5～10.8.15	관리과 총괄
〃	이상선	5급	‘09.4.17～11.5.1
〃	주명학	5급	‘11.5.2～12.5.1
〃	신중서	5급	‘12.5.2～12.11.4
〃	최성만	5급	‘12.11.5～13.10.31
〃	전동환	5급	‘13.11.1～’04.04.20
〃	엄명화	5급	‘14.04.21～‘14.06.30	도서관지원과 총괄
〃	권선용	5급	‘14.07.01～‘15.11.1
〃	이창기	5급	‘15.11.2～16.5.1
〃	김위성	5급	16.5.2~16.12.31
〃	고숙자	5급	‘17.1.1~현재
팀장	신종욱	6급	‘11.11.1~16.5.1	도서관정책팀 총괄
	박대철	6급	‘16.5.2~현재
담당	김재권	7급	‘12.1.16～12.3.2	도서관 건립
〃	박희수	8급	‘12.3.3～12.5.1
〃	오만석	7급	‘12.5.2～12.11.4
〃	박성구	6급	‘12.11.5～14.4.20
〃	김주태	7급	‘14.04.21～‘15.04.30
〃	차연수	7급	‘15.05.01～‘15.11.01
〃	배경숙	7급	‘15.11.02～16.5.1
〃	이창숙	7급	‘16.5.2~16.12.31
〃	윤부연	7급	‘17.1.1~18.3.1
〃	이미정	6급	‘18.3.2 ~ 현재

다른기관 또는

민간인 관련자

해당없음

추진경과

및 실적

○ 2009. 01. 15 : 서현도서관 건립계획 수립

○ 2009. 02. 24 : 공유재산관리계획 심의 의결(성남시의회)

○ 2009. 07. 20 : 주민설명회 개최(1차)

○ 2009. 08. 14 : 도서관 건립 타당성 조사용역 완료

○ 2010. 10. 12 : 서현도서관 건립계획 보고

○ 2011. 03. 30 : 투융자사업 심사(경기도)

○ 2011. 04. 29 : 주민설명회 개최(2차)

○ 2013. 12. 02 : 도시관리계획 변경(주차장 폐지) 공람 공고(도시계획과)

○ 2014. 02. 05 : 도시관리계획 변경 결정(주차장 폐지)-도시계획위원회

○ 2014. 07. 14 : 기본조사 및 실시설계용역 착수

○ 2014. 09. 15 : 기본설계에 대한 사전설명회(시의원 3- 서현동 지역)

○ 2014. 10. 13 : 기본설계에 대한 주민설명회

○ 2014. 12.  4. 경관 및 도시미관 심의

○ 2014. 12. 31 : 설계 경제성 검토 등 설계VE용역 체결

(24,791,000원)

- 참건축사무소(군포시 소재) - 준공기간 2015. 4.1

○ 2015.  1.  8 : 경관 및 도시미관 재심의(시설공사과)

○ 2015.  1. 28 : 건축심의위원회 심의

○ 2015.  4. 28 : 설계자문위원회 신청

○ 2015.  5. 20 : 지방재정 중앙 투자사업 심사 조건부 승인

○ 2015.  5. 27 : 굴토심의

○ 2015.  6. 19 : 설계자문위원회 완료, 건축협의 신청

○ 2015.  7. 30 : 계약심의 완료

○ 2015.  9.  7 : 건축협의 완료

○ 2015. 11. 19 : 계약심사

○ 2015. 12. 28 : 기술검토 완료

○ 2016.  3. 28 : 공사 계약심사

○ 2016.  5. 10 : 공사 착공

○ 2018. 10. 24 : 공사 준공