정책실명제 공개과제 대상사업 사업내역서

① 사업부서	도서관지원과 (2018 – 62)	② 담당자 (전화번호)	이미정 (729-4672)
③ 정책사업명	복정도서관 건립
④ 선정기준	그 밖에 시장이 정책실명제가 필요하다고 인정하는 정책	⑤ 사업기간	2009.11 ~ 2019.6
⑥ 주요내용	○ 위 치 : 성남시 수정구 복정동 649번지 등 3필지 ○ 사업기간 : 2009. 11. ∼ 2019. 6. ○ 사 업 량 : 지하2층/지상4층(부지 3,313㎡, 건축연면적 8,579.56㎡) ○ 시설규모 : 도서관 3,310㎡(지상4층), 주차장 6,626㎡(지하2층) ○ 소요예산 : 23,500백만원 (공사비 19,304 / 설계비 829 / 감리비 1,579 / 시설부대비등 1,788) ○ 추진상황 - 2009. 11. 19 : 복정도서관 건립 추진계획 수립 - 2013. 05. 13 : 복정도서관 건립 타당성조사용역 - 2013. 07. 23 : 주민설명회 개최 - 2013. 10. 24 : 중앙 투융자사업 심사승인(안전행정부) - 2013. 11. 25 : 공유재산 관리계획 심의 의결(성남시의회) - 2013. 12. 23 : 도시관리계획 및 지구단위계획 변경 용역 - 2014. 07. 07 : 도시관리계획 변경 결정 고시 - 2014. 07. 15 : 기본조사및실시설계 용역 발주 - 2014. 12. 9 : 설계공모 실시 - 2015. 4. 6 : 설계용역 계약 및 착수 - 2015. 6. 19 : 시의원 사전설명회 개최 - 2015. 7. 17 : 주민설명회 개최 - 2015. 11. 11 : 도시공원위원회 심의 - 2016. 3. 14 : 도시계획시설 실시계획 인가 - 2015. 04. 07 : 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2016. 12. 26 : 기본 및 실시설계 용역 준공 - 2016. 12. 30 : 공사 계약 - 2017. 03. 20 : 공사 착공 - 2019. 6월 : 공사준공예정